5-31	빛공원 조성

			관리번호		5-31
추진부서	녹지공원과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	조명철 (3419)	담당자		김경환 (3415)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		50%

목    적

❍ 사천시의 대표적인 공원인 노산·수양공원에 관광수요 확대 및 야간 명소화를 이끌 수 있는 체류형 소비공간 조성

❍ 노산·수양공원 주변 경관과 조화를 이루는 야간조명 및 미디어 플랫폼 구축 등 최신기술 도입을 통해 야간 명소로 발돋움

사업개요

□ 위    치: 서금동 101-1번지, 사천읍 선인리 580-2번지 일원

□ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 12.

□ 사업내용: 노산·수양공원 경관조명 설치 및 미디어 아트 하드웨어 구축 운영, 노후 노산공원 데크로드 철거 및 교체(L=124m, B=2m) 등

❍ 사 업 비: 3,000백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	3,000	-	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-
국비	1,500	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-
도비	90	-	90	-	-	90	-	-	-
시비	1,410	-	1,410	-	-	1,410	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022. 10. ~ 2023. 1.: 빛공원 조성 세부 계획 수립

❍ 2023.  3.: 노산 빛공원 데크정비사업 실시설계 용역 준공

❍ 2023.  3.: 2024년 발전소주변지역 특별지원사업 사업계획서 제출

❍ 2023.  4.: 노산 빛공원 데크정비사업 착공

❍ 2023.  4.: 노산 빛공원 야간조명 제작 및 설치 제안 공고(협상에 의한 계약)

❍ 2023.  5.: 노산 빛공원 제안서 평가위원회 개최

❍ 2023.  6.: 노산 빛공원 협상 계약 체결 및 사업 추진

❍ 2023.  9.: 노산 빛공원 데크정비사업 준공

❍ 2023. 11. ~ 2024. 4.: 노산 빛공원 미디어아트 및 경관조명 설치

❍ 2024.  4.: 노산 빛공원 조성사업 준공

추진상 애로사항 및 대책

❍ 노산 빛공원 완성도 제고를 위해 사업구역 확대 및 수시 보완이 필요할 수 있음

❍ 수양 빛공원은 문화재구역을 포함하고 있어 빛연출의 추진방향과 세부내용의 종합적 검토가 필요하고, 문화재 심의 등 행정절차 이행에 따른 신속 추진이 어려울 수 있음

향후 추진계획

❍ 2024. 7. ~ 2024. 12.: 수양 빛공원 계약 체결 및 사업 추진

❍ 2024. 12.: 수양 빛공원 조성사업 준공

❍ 2025. 1. ~ 계속: 시설물 유지관리

❍ 2025. 1. ~ 계속: 빛공원 보완 및 추가사업

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		50%	100%
노산 빛공원 조성		노산 빛공원 조성	노산·수양 빛공원 조성