5-6	시외버스터미널 리모델링 실시

			관리번호		5-6
추진부서	교통행정과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시/민간
완료시기	임기내	팀 장	김성훈 (3364)	담당자		박진미 (3363)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		45%

목    적

❍ 삼천포항 관문인 시외버스터미널을 방문하는 이용객들에게 깨끗하고      쾌적한 관광 사천 이미지 제고와 편의 도모

사업개요

❍ 위    치: 사천시 중앙로 158 삼천포시외버스공용터미널

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2027년

❍ 사업내용: 터미널 리모델링 1식

❍ 사 업 비: 45백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	45	-	-	-	25	20	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	45	-	-	-	25	20	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ (1차 면담)터미널 현대화 사업(신축) 의지 확인: 2022. 7. 22.

❍ (2차 면담)신축에 대한 대표자 의지 확고: 2022. 8. 16.

- 에이드디자인그룹 건축사사무소 설계의뢰(서울 강남구 소재)

- 임시주차장에 대한 임대료 지원 건의

❍ (4차 면담)터미널 현대화 사업 계획안 의논(도시과): 2022. 10. 13.

- 지하5층 지상38층(1층 대합실, 2~4층 근린생활시설, 5~38층 공동주택) 건물 건립 시 입체적 도시계획시설로 결정 변경해야 가능

- 현 부지에서 38층 건립 시 교통혼잡으로 인한 추가 도로개설이 필요

⇒ 건물 건립 시 건축 면적이 줄어도 되는지 터미널 대표자에게 검토 요청

❍ (7차 면담) 건축사와 협의 중(신축 고려): 2023. 1. 11.

❍ (8차 면담) 시장, 도시과장: 2023. 2. 28.

- 제출한 현대화 사업계획안으로 허가 불가 → 대표 신축 포기

- 터미널 리모델링 계획 의논

❍ (9차 면담): 2023. 5. 18.

- 리모델링 시 2층에 골프연습장 설치 가능 여부 문의

- 건축과 답변: 현재 업무시설을 2종 근린생활시설로 변경하면 골프연습장(바닥면적 500㎡이하) 가능

❍ (10차 면담): 2023. 5. 22.

- 2층 사무실을 1층으로 이동하고 2층을 2종근린생활시설 변경 검토

- 설계사무소 의뢰 등 제반사항 검토 예정

❍ 도색 및 간판 제작 재정지원 추진 계획: 2023. 10. 11.

❍ 도색 및 간판 제작지원 사업 추진 중

❍ 2023년도 사업 추진 현황 (부분 리모델링): 2023. 12. 20 완료

- 터미널 외벽 도색, 간판(알루미늄 채널) 제작 각 1식

- 사업비: 금23,105천원(보조금)

추진상 애로사항 및 대책

❍ 시민들이 이용하는 공용터미널이긴 하지만 개인소유 건물로, 여객      자동차 운수사업법 제50조(재정지원)에 따라 여객터미널 리모델링       사업 추진 시 민간사업자의 자부담이 필요

❍ 저예산 투입 대비 효과가 크고, 신속하게 사업을 추진할 수 있는       터미널 외벽 도색 및 간판 제작비 재정지원을 우선 시행함

향후 추진계획

❍ 2024년 시외버스터미널 환경개선사업 지원

- 화장실 배관공사 / 금20,000천원

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	0%	30%	70%	100%
터미널 리모델링	사업자 의지 확인	리모델링 사업추진 계획 수립	리모델링 사업추진	리모델링 사업추진