5-9	발전소 우회도로 조기 완공

			관리번호		5-9
추진부서	도 시 과	협조부서	-
사업기간	2019.~ 2026.	총사업비	61,600백만원(시비37,000, 기타24,600)
완료시기	임기내	팀 장	이주은 (3169)	담당자		황용찬 (3165)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		30%

목    적

❍ 화력발전소 증설, 신항만 및 향촌산업단지 준공 등으로 인한 물동량 증가로 배후도로 개설 필요

❍ 장기미집행 시설 집행으로 민원해소 및 우회도로 개설로 시가지 교통난 해소

사업개요

❍ 위    치: 사천시 좌룡동~향촌동

❍ 사업기간: 2019.~ 2026.

❍ 사 업 량: 도로개설 L=4,300m, B=18.0m

❍ 사 업 비: 61,600백만 원(공사비 24,600, 보상비 37,000)

※ LH와 토지공급계약 체결에 따른 분할 상환금 납부(2026년까지)

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2022	2023	2025	2026 상반기
계	61,600	23,000	38,600	5,000	5,000	12,800	15,800	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	37,000	13,000	24,000	1,200	0	7,000	15,800	-
민자/기타	24,600	10,000	14,600	3,800	5,000	5,800	-	-

추진상황

❍ 2018.  9.: 화력발전소 우회도로 개설사업 추진계획 수립

❍ 2019. 12.: 화력발전소 우회도로 개설 협약(사천시, 고성그린파워(주)]

- 우회도로 개설 L=4,300m, B=18.0(보상: 사천시, 공사: 고성그린파워(주))

❍ 2019. 12.: 2020년도 공공토지비축 신청(국토교통부, LH)

❍ 2020.  6.: 2020 공공토지비축 대상 확정

❍ 2020.  6.: 도시계획시설사업 실시계획 인가

❍ 2020.  8.: 토지은행제 업무 협약 체결(사천시, LH)

❍ 2020. 10.: 비축사업계획 승인 고시(국토교통부 고시 제2020-221호)

❍ 2021.  2.: 보상계획 및 열람공고

❍ 2022.  1.: 수용재결 신청(LH→중앙토지수용위원회)

❍ 2022.  8.: 재결 완료(중앙토지수용위원회)

❍ 2022. 10.: 수용개시(LH, 공탁금 지급)

❍ 2022. 12.: 공사 입찰 공고(고성그린파워(주))

❍ 2023.  1.: 공사 계약(고성그린파워(주) ↔ ㈜케이디)

❍ 2023.  2.: 가설건축물 축조 신고 완료(현장사무실)

❍ 2023.  3.: 건설사업관리용역 계약 체결

❍ 2023.  4.: 실 공사 착공

❍ 2023.  5.: 화력발전소 우회도로 개설공사 설명회 개최

❍ 2023.  6.: 부서 및 주민의견 검토 요청(사천시→고성그린파워(주))

- 삼천포천교, 봉남천교 교량 재검토, 용배수로 공급, 교차로 형식 변경

❍ 2023.  7.: 부서 및 주민의견 검토 회신(고성그린파워(주)→사천시)

❍ 2023.  8.: 합동회의 실시(3차) - 용배수로 설치 관련(사업반영 건의)

❍ 2023. 10.: 향촌동 주민설명회 개최[향촌동장, 당진마을 통장 외 6명]

❍ 2023. 10.: 설계변경 관련 합동회의 개최[시, GGP, 감리단, 시공사]

❍ 2023. 12.: 삼천포천교, 봉남천교 교량 변경설계 완료

❍ 2024.  1.: 용배수로 설치관련 설계변경 완료

❍ 2024.  2.: 교차로 계획 회전교차로 변경 계획 협의(시,GGP,시공사)

❍ 2024.  3.: 삼천포천교, 봉남천교 하천 협의 완료 및 착수

❍ 2024.  6.: 삼천포천교, 봉남천교 기초 완료

추진상 애로사항 및 대책

❍ (문제점)

- 2024년 상반기 잦은 강우로 인한, 교량설치(봉남천교, 삼천포교)등 공사 지연

- 도로시설물의 효율적인 관리를 위한 추가공사(회전교차로 4개소, 인도 및 배수로 정비(L=200m), 광역상수도 이설 등)에 소요되는 사업비(50억원) 증액 예상됨.

❍ (대  책)

- 지연된 공사는 장비 및 인력을 증원하여 공정 만회하고자 함.

- 사천시와 고성그린파워(GGP)간의 협의를 통해, 추가 공사에 소요되는 공사비는 GGP 공사 입찰 잔액으로 공사 추진

향후 추진계획

❍ 2025. 12.: 공사 준공[고성그린파워(주)]

❍ 2026.  3.: 시설물 인계[고성그린파워(주)→사천시]

❍ 2026.  6.: 공공개발용 토지 매매대금 납부 완료

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	53%	75%	100%	100%
발전소 우회도로 조기 완공	보상 완료	공사 착공	공사 추진	공사 준공	시설물 인계	사업 시행