특수공시 목록

□ 삼천포 노인복지회관 건립

□ 사주체육회관 건립

□ 신청사 건립

□ 번창공업사~공설운동장간 도로개설

□ 금홍교 확장공사

□ 사천초전공원 조성

□ 통합보건소 이전 신축

삼천포 노인복지회관 건립

노인인구 증가에 따른 여가활용 및 휴식공간 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 선구동 115-2번지

○ 사업기간 : 2007. 7 ~ 2008. 4

○ 사 업 량 : 부지 965㎡,  건물 1,015㎡(지상 3층)

○ 총사업비 : 1,600백만원

□ 사업 추진상황

○ 2007. 5 ~ 2007. 6 : 폐기물 철거 및 처리 용역

○ 2007. 7 : 착공

○ 2008. 4 : 준공

□ 기대효과

○ 노인들의 삶의 질 향상

○ 지역사회 노인복지사업의 구심적 역할

사주체육회관 건립

생활체육의 활성화와 주민들의 운동공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 사천읍 사주리 146-3번지

○ 사업기간 : 2007. 8 ~ 2008. 3

○ 건물규모 : 건축면적 774.58㎡, 연면적 773.08㎡, 높이 11.65m

○ 총사업비 : 850백만원

□ 사업 추진상황

○ 2007. 8 : 착공

○ 2008. 3 : 완료

○ 2008. 5 : 개관식

□ 기대효과

○ 생활체육기반시설 확충 및 주5일제 근무로 인한 여가활동 공간 제공

○ 체육복지에 대한 상대적 소외감 해소

신청사 건립

양지역 주민의 구심적 역할인 통합청사 신축으로 시민들의 일체감을 조성하고

양청사의 사용으로 인한 행정능률 저하 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 용현면 덕곡리 일원

○ 사업기간 : 2004. 5 ～ 2007. 4

○ 사 업 량 : 부지면적 69,432㎡,  건물면적 18,491㎡

○ 총사업비 : 43,400백만원

□ 사업 추진상황

○ 1995. 8 : 청사건립계획수립

○ 2004. 3 : 편입토지 보상 완료

○ 2004. 5 : 신청사 신축공사 착공

○ 2007. 5 : 신청사 개청

□ 기대효과

○ 시민화합을 위한 통합청사 건립으로 시민의 구심점 확보

번창공업사～공설운동장간 도로개설

주거 밀집지역의 주민불편을 해소하고  도시기반시설을 확충

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 사천읍 수석리 지내(중로2-1호선)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2015

○ 사 업 량 : L=1,200m, B=15m(1차공사 L=307m, B=15m)

○ 총사업비 : 12,050백만원(1차공사 3,050백만원)

□ 사업 추진상황

○ 2001.  9 : 실시계획 인가

○ 2001. 10 ～ 2006. 6  : 편입토지 보상협의(L=307m, 보상비 2,520백만원)

○ 2006.  7 : 착공

○ 2007.  5 : 준공(L=307m,B=15m, 공사비 530백만원)

□ 기대효과

○ 도시기반시설 확충을 통한 교통난 해소

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 주민 불편 민원 해소

금홍교 확장공사

수협냉동창고 신축 등 주변 여건 변화로 교량 폭이 협소하여 병목

구간을 확장하여 차량통행 불편을 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 동금동 지내

○ 사업기간 : 2006. 5 ~ 2008. 2

○ 사 업 량 : 교량확장(L=49m, B=12m)

○ 총사업비 : 2,100백만원

□ 사업 추진상황

○ 2006.  5 : 착공

○ 2007. 12 : 준공

□ 기대효과

○ 협소한 교량의 폭을 확장하여 차량통행 불편 해소

○ 수협냉동창고 신축 등 신항만 물동량 수송원활 기여

사천 초전공원 조성 사업

특색 있는 생활 공원 조성으로 이용객의 건강증진 도모는 물론

쾌적한 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 사남면 초전리 및 방지리 일원

○ 사업기간 : 2006. 12 ~ 2007. 12

○ 사 업 량 : 면적 155,318㎡

○ 총사업비 : 4,300백만원

□ 사업 추진상황

○ 2005.  7 : 계획수립

○ 2006. 10 : 토지보상협의(2필지, 2,529㎡)

○ 2006. 12 : 착공

○ 2007. 12 : 준공

□ 기대효과

○ 쾌적한 휴식 공간 제공으로 시민의 건강 증진 도모

○ 친환경적인 공원조성으로 주거환경 개선은 물론 관광자원화 기여

통합보건소 이전 신축

변화된 보건의료 욕구 충족 등 질 높은 의료서비스 제공으로

시민의 건강보호․증진 센터로서 중추적인 역할 수행

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 용현면 덕곡리 501번지

○ 사업기간 : 2005. 4 ~ 2008. 3

○ 사 업 량 : 지하1층 지상3층, 연면적 2,723㎡

○ 총사업비 : 4,178백만원

□ 사업 추진상황

○ 2005. 4 : 사천시 보건소 신축사업 대상 확정

○ 2006. 9 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2007. 1 : 착공(2008. 03 준공)

□ 기대효과

○ 보건행정 업무의 효율성 제고

○ 질 높은 의료서비스 제공으로 시민의 건강보호․증진 센터로서 역할 수행