개별 투․융자 심사 추진현황 세부내역[별지 7]

-  목    차  -

연 번	사 업 명	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)	페이지
1	사천시 종합장사시설 신축공사	2011 2013	67	1
2	무형문화재 전수관 건립사업	2012	10	3
3	삼천포지구 하수관거 정비사업	2007	90	4
4	서포면소재지 종합정비사업	2013	40	5
5	사천바다케이블카 설치	2013	15	6
6	삼천포지구 하수관거 개보수	2012	-	7
7	제52회 경남도민 체육대회 개최	2012	100	8
8	사천지구(2단계) 하수관거 정비	2011	-	9
9	삼천포수산시장시설 현대화 사업	2011	100	10
10	삼천포에너지자립화 및 하수슬러지감량화	2011	15	11
11	삼천포 하수처리장 시설개량 사업	2012	15	12
12	용현지구 하수관거 정비사업	2010	100	13
13	국도3호선(송포교차로) ~ 죽림삼거리간 도로확포장	2010	50	14
14	월등도·진도 진입로 개설공사	2010	80	15
15	시도1호선 확포장 공사	2009	80	16
16	해양낚시공원 조성사업	2009	80	17
17	신벽소하천 정비공사	2012	70	18
18	벌용동주민센터 이전 신축사업	2012	10	19

연 번	사 업 명	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)	페이지
19	곤양생활체육시설 조성	2013	10	20
20	초양도 관광거점 마을 만들기	2013	5	21
21	문화공원조성사업	2013	5	22
22	실안 노을 레일바이크 설치사업	2013	10	23
23	노인복지종합타운 조성사업	2013	10	24
24	용강주공A~용두간 도시계획도로 개설 공사	2006	60	25
25	국도3호선~신도시간 도로개설 공사	2008	95	26
26	시도12호선 확·포장 공사	2010	95	27
27	사천초등학교~중학교간 도시계획도로개설 공사	2007	90	28
28	각산주변 산복도로 개설 공사	2006	60	29
29	남양중학교~모충공원간 도시계획도로 개설	2005	25	30
30	지방도1016호선 우회도로 개설	2006	60	31
31	소곡마을 하수도 설치사업	2007	100	32
32	우천마을 하수도 설치사업	2007	100	33
33	홀곡마을 하수도 설치사업	2008	50	34
34	하수슬러지처리시설 설치사업	2014	5	35

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

사천시 종합장사시설 신축공사

담당자

사회복지과 신성현

(☎831-2653)

□ 필요성 및 기대효과

○ 노후화된 기존 화장시설 개선으로 유족불편 해소

○ 새로운 장사문화 정착에 따른 미래수요 대비

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 1 ~ 2014. 12

○ 위    치 : 사천시 송포동 1430-1번지 일원

○ 시 공 사 : (주)관보토건 김 상 우

○ 사업규모 : 화장장(2,829㎡,4기), 봉안당(1,928㎡), 자연장(16,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원(국비 6,731, 시도비 2,500, 시군구비 15,769)

○ 지금까지 집행액 : 18,689백만원

구 분	계	2010이전	2011	2012	2013	비고
계	18,689	5,726	6,463	3,500	3,000
국 비	6,731	2,469	4,262	-	-
도 비	1,500	500	-	1,000	-
시 비	10,458	2,757	2,201	2,500	3,000

○ 향후 소요액 : 6,311백만원

구 분	계	2014	미확보	비고
계	6,311	3,300	3,011
국 비	-	-	-
도 비	-	-	-
시 비	6,311	3,300	3,011

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 67%)

○ ‘11. 06. 07 : 종합장사시설신축공사 계약 /(주)관보토건

○ ‘11. 06. 08 : 공사착공

○ ‘11. 07. 06 : 전면책임감리용역 일찰 및 계약 /(주)하우엔지니어링

□ 향후계획

○ ‘14. 12. 06 : 공사준공

사업명

사천시 종합장사시설 신축공사

담당자

사회복지과 신성현

(☎831-2653)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초		변 경(최종)		증액사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
계	18,900		25,000
공사비	16,000	ㅇ부지조성 (146,040㎡) ㅇ자연장지 (16,000㎡) ㅇ화장장 (2,829㎡) ㅇ봉안당 (1,895㎡)	20,209	ㅇ부지조성 (146,040㎡) ㅇ자연장지 (16,000㎡) ㅇ화장장 (2,829㎡) ㅇ봉안당 (1,895㎡)	설계변경(설계누락 등) 반영 등 사업비 증가
보상비	1,025	17필지 (147,525㎡)	1,868	19필지 (152,269㎡)	보상필지 추가
용역비	473	실시설계	1,368	실시설계 감리비	감리비 추가
기 타	1,402	화장로	1,555	화장로 산지전용비	산지전용비용 발생

사업명

무형문화재 전수관 건립사업

담당자

문화관광과 정연승

(☎831-2715)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건축물의 노후화 및 공간부족으로 전수활동 불편, 주변지역의 도시화로       소음민원 증가

○ 전수관 통합 건립에 따른 전승·공연활동 극대화로 격조 있는 전통문화        향유로 시 이미지 제고 및 관광자원 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2015

○ 위 치 : 사천시 용현면 선진리 864-2번지 일원

○ 규 모 : 연면적 4,500㎡(전수관 2동, 공연장 1동, 기숙사 1동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,000	-	82	222	5,696
국 비	3,000	-	41	111	2,848
시 도 비	1,050	-	14	39	997
시군구비	1,950	-	27	72	1,851
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘14. 4월 : 전수교육관 건립공사 기본 및 실시설계 준공

○ ‘14. 6월 : 실시설계 심사 승인(문화재청)

□ 향후계획

○ ‘14. 8월 : 건축협의 및 계약심사(도)

○ ‘14. 10월 : 공사착수

○ ‘15. 12월 : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 : 4,500백만원(국비 22.5  시도비 7.875 시군구비 14.625)

○ 변경 : 6,000백만원(국비 3,000 시도비 1,050 시군구비 1,950)

사업명

삼천포지구 하수관거정비사업

담당자

하수도사업소 정광복

(☎831-5547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 04. 27 ~ 2014. 10. 30

○ 위 치 : 사천시 선구동, 동서동, 동서금동 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=69.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	19,900	10,616	4,927	4,357	-
국 비	13,930	7,432	3,979	2,519	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,970	3,184	948	1,838	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ '09. 04. 27 : 공사착공

○ '09. 07. 14 : 책임감리용역 착수

○ '11. 12. 30 : 2011년 2차분 준공

○ '13. 02. 21 : 2012년 3차분 준공

○ '13. 12. 27 : 2013년분 준공

□ 향후계획

○ ‘14. 10. 30 : 2014년분 및 총괄분 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

서포면소재지 종합정비사업

담당자

도시과 강민승

(☎831-3161)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌지역의 중심공간으로 육성하여 주민복지 향상에 기여

□ 사업개요

○ 위      치 : 사천시 서포면소재지 일원

○ 사 업 기 간 : 2013년 ~ 2016년(4년간)

○ 사  업  량 : 3개 분야 11개 단위사업

- 기초생활 기반확충 : 도시계획도로개설 외 4건

- 지역경관 개선 : 생태공원조성 외 2건

- 지역역량강화 : 주민 교육훈련 외 2건

○ 현  공  정 : 40% (주민복지센터 시공중)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원(국비4,872 도비626 시비1,502)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,000	-	956	1,476	4,568
국 비	4,872	-	669	1,033	3,170
시 도 비	626	-	86	133	407
시군구비	1,502	-	201	310	991
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ‘12. 10. 24 : 서포면소재지 정비사업 확정 통보

○ ‘13. 04. 09 : 기본계획수립 및 실시설계용역 착수

○ ‘13. 11. 13 : 기본계획고시(사천시)

○ ‘13. 11. 20 : 재래시장 보상협의 실시

○ ‘13. 12. 18 : 도시계획시설(도로) 실시계획 인가

○ ‘14. 02. 28 : 서포면소재지 종합정비공사(2014년분) 착공

□ 향후계획

○ ‘14. 10 : 재래시장 정비

○ ‘15. 01 : 주민복지센터 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

사천바다 케이블카 설치

담당자

전략사업담당관 박용국

(☎831-2285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환경부 국립공원위원회 케이블카 시범사업 심의 결과 국립공원 케이블카        설치 가이드라인과 시범사업 검토기준에 부합하여 ‘12. 6월 해상형 시범사업       으로 선정

○ 수려한 해안 경관, 연육교 등 다양한 관광 인프라와 연계한 해상케이블카를 설치하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 경상남도 사천시 동서동 일원(각산~대방동~초양도)

○ 규 모 : 케이블카 L=2.53㎞, 상․중․하부역사 각 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	40,000	770	4,300	10,000	24,930
국 비	5,000	-	-	3,000	2,000
시 도 비	10,000	-	1,000	1,000	8,000
시군구비	25,000	770	3,300	6,000	14,930

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ‘12. 06. : 공원계획 변경 승인

○ ‘12. 12. : 도시관리계획(궤도)결정 및 지형도면 고시

○ ‘13. 03. : 모자이크 사업성 재평가(도비 150억원 지원 확정)

○ ‘13. 05. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘13. 06. : 케이블카 사업계획(중간역사) 변경 협의

○ ‘13. 08. : 기본계획 및 교통영향분석 개선대책 수립

○ ‘13. 10. : 지방재정 중앙 투․융자 심사 승인(조건부)

○ ‘14. 02. : 기본설계 완료

○ ‘14. 05. : 사천삭도 공원관리협약서 체결

□ 향후계획

○ 2014. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 인가, 궤도사업 및 공원사업 시행허가

○ 2015.     : 공사 착공

○ 2016. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

삼천포지구 하수관거 개․보수사업

담당자

하수도사업소 정광복

(☎831-5549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 01. ~ 2016. 12

○ 위 치 : 사천시 동지역 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=11.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,569백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후-
계	12,569	1,210	601	3,337	7,421
국 비	7,442	363	180	1,299	5,600
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,127	847	421	2,038	1,821
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ '11. 03.    : 사업예산 신청(사천시→경남도, 낙동강유역환경청)

○ '11. 12.    : 중기지방(5개년) 재정계획 반영

○ '12. 01. 18 : 사업예산 확정(수질총량관리과-360)

○ '12. 04.    : 지방재정 투․융자심사 결과(조건부)

○ '12. 03. 16 ~ 06. 23 : 사업타당성 조사용역(19.7백만원)

○ '13. 04. 09 ~ 11. 08 : 기본 및 실시설계용역(588백만원)

○ '13. 07. 03 : 재원협의중

□ 향후계획

○ ‘14. 8. : 공사발주

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

제52회 경남도민체육대회

담당자

체육지원과 조수옥

(☎831-2411)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제52회 경남도민체육대회 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4. 26. ~ 4. 29.

○ 위 치 : 사천시 일원

○ 규 모 : 제52회 경남도민체육대회에 임원․선수 12,000 여명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,949백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,471	-	1,949	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	40	-	40	-	-
시군구비	2,431	-	1,909	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제52회 도민체전을 성공적으로 치러냄

○ 대회신기록 10개, 4관왕 11명, 3관왕 57명이 탄생

○ 18개 시․군 12,000 여명의 선수와 임원이 참여

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

사천지구(2단계) 하수관거정비사업

담당자

하수도사업소 이정훈

(☎831-5557)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01. ~ 2016. 12

○ 위 치 : 사천시 사천읍 용당․구암리, 사남면 유천리, 축동면 배춘리 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=12.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,393백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	17,393	-	101	3,665	13,627
국 비	12,175	-	71	2,564	9,540
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,218	-	30	1,101	4,087
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ '11. 03. 25 : 지방재정 투․융자심사(적정)

○ '11. 05. 12 ~ ‘12. 01. 15 : 실시설계용역 시행(관거분야)

○ '13. 08. 29 : 재원협의 서류 제출(시→낙동강유역환경청)

○ '14. 05. 27 : 계약심사 완료

□ 향후계획

○ ‘14. 7. : 공사발주

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

삼천포수산시장 시설현대화사업

담당자

지역경제과 문상희

(☎831-3062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼천포서부시장의 시설 노후화로 환경개선 시급

○ 삼천포어항 개발과 연계된 수산물 종합유통센터로 개발하여 동지역

경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2013

○ 위 치 : 사천시 어시장길 64(동동) 일원

○ 규 모 : 부지면적 7,288㎡, 건축면적 4,282.49㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,460백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,463	7,163	300	-	-
국 비	3,666	3,666	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,797	3,497	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-		-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 6. 12 : 공사착공

○ 2013. 6. 21 : 공사준공

○ 2013. 6. 29 : 개장행사 실시

□ 향후계획

○ 문화관광형시장 육성발전을 통한 외부 관광객 유치 및 지역경제 활성화

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량화사업

담당자

하수도사업소 조용기

(☎055-831-5550)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유기성 자원을 신재생 에너지화하여 에너지 자립화율 증대

○ 소화효율 증대로 슬러지 감량에 따른 슬러지 육상처리 비용 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 01 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 사천시 환경길 55 삼천포공공하수처리시설내

○ 규 모 : 소화조 Q= 4,020㎥ 시설개량

- 소화조 교반시설, 가온방식, 가용화설비 개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,010백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,010	400	2,352	2,029	1,229
국 비	4,207	280	1,650	1,420	857
도 비	901	60	351	305	186
시 비	902	60	351	304	186

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

○ 2011. 10. 21. : 지방재정 투·융자심사

○ 2012. 01. 18. : 환경부 국고보조금 확정통보

○ 2013. 11. 14. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료

○ 2013. 12. 23. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 02. 12. : 경상남도 계약심사 완료

○ 2014. 05. 09. : 한국환경공단 공사업무 위탁협약

□ 향후계획

○ 2014. 07 : 한국환경공단 설계도서 검토

○ 2014. 08 : 공사 착공

○ 2015. 12 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

삼천포하수처리장 시설개량사업

담당자

하수도사업소 조용기

(☎055-831-5550)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동절기 공공하수처리시설 수질기준 강화에 따른 법적 수질기준 준수

○ 연안지역 수질오염을 개선하여 남해안 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 01. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 사천시 환경길 55 삼천포공공하수처리시설내

○ 규 모 : 처리시설 Q=43,000㎥/일 시설개량

- 총인 및 총질소 저감시설 1식

- 반응조 덮개 및 반응조 탈취기 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	16,000	1,191	3,200	1,066	10,543
국 비	8,000	240	1,600	711	5,449
도 비	4,000	475	800	-	2,725
시 비	4,000	476	800	355	2,369

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

○ 2012. 01. 18. : 환경부 국고보조금 확정통보

○ 2012. 04. 09. : 지방재정 투·융자심사

○ 2013. 09. 02. : 경남도 건설기술심의(VE) 의결

○ 2013. 12. 11. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료

○ 2013. 12. 23. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 01. 10. : 경상남도 공공하수도 변경인가

○ 2014. 02. 28. : 경상남도 계약심사 완료

○ 2014. 05. 09. : 한국환경공단 공사업무 위탁협약

□ 향후계획

○ 2014. 07 : 한국환경공단 설계도서 검토

○ 2014. 08 : 공사 착공

○ 2015. 12 : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

용현지구 하수관거정비사업

담당자

하수도사업소 이정훈

(☎831-5557)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 06. 28 ~ 2014. 05. 30

○ 위 치 : 사천시 용현면 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=52.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,524백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후-
계	13,524	6,775	4,999	1,750	-
국 비	9,467	4,743	4,668	56	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,057	2,032	331	1,694	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '10. 11. 24 : 공공하수도 설치인가 및 고시

○ '14. 05. 30 : 총괄분 준공

□ 향후계획

○ ‘14. 08. 30 : 국고보조금 정산 자료 제출

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

국도3호선(송포교차로)~죽림삼거리간 도로확포장공사

담당자

도시과 김수언

(☎831-3167)

□ 사업목적 및 필요성

○국도3호선 준공으로 기존 삼천포항 진입도로 확․포장 필요

○ 삼천포항 지역경제 활성화를 위한 여건조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 송포동 일원

○ 노 선 명 : 남부 대로1-3호선

○ 사업기간 : 2012년 ~ 2017년

○ 사 업 량 : L=1,500m, B=10m→25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원(국비  , 도비 5,000, 시비 10,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	15,500	4,000	200	2,000	9,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	500	-	1,000	3,500
시군구비	10,500	3,500	200	1,000	5,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘12. 02. : 실시설계 용역

○ '12. 03. ~ ‘16. 12. : 보상 협의 및 공사 추진

□ 향후계획

○ ’17. 01 : 공사착공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

월등도·진도 진입로 개설공사

담당자

건설과 장경현

(☎831-3266)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해안 관광벨트사업에 반영된 비토섬을 거점관광지로 개발

○ 해양체험 관광수요 증대에 따라 일주도로 조기 개설 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2014년(5년간)

○ 위 치 : 사천시 서포면 비토리, 다평리

○ 규 모 : 도로개설 L=1.7km, B=10.5m

- 1공구 L=0.6km, B=10.5m

- 2공구 L=1.1km, B=10.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원(국비 5,600, 도비 656, 시비 744)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,000	3,420	1,250	2,212	118
국 비	5,600	2,735	1,000	1,770	95
시 도 비	656	298	125	221	12
시군구비	744	387	125	221	11
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2012.02.20 : 1공구 2012년분 착공

○ 2013.03.04 : 2공구 2013년분 착공

○ 2013.04.26 : 1공구 2011년분 준공

○ 2013.12.05 : 2공구 도시관리계획(변경)

○ 2014.01.10 : 1공구 잔여분 착공

○ 2014.01.17 : 1공구 2012년분 기성

□ 향후계획

○ 2015.10 : 2공구 준공(총괄준공)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

시도1호선 확․포장

담당자

도시과 김수언

(☎831-3167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국토 3호선 통행량 증가에 따른 교통 분산 도로 확장 필요

○ 진주→사천 출퇴근 차량의 증가에 따른 병목현상 해소 필요

□ 사업개요

○ 위    치  : 사천시 사천읍 사주리 ~ 사남면 월성리 일원

○ 사업기간  : 2009 ~ 2015(7년간)

○ 사 업 량  : L=1,250m, B=20m

○ 총 사업비 : 11,000백만원(국비 3,300, 도비 1,500, 시군비, 6,200 )

○ 사업내용 : 도로 확․포장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총 사업비 : 11,000백만원(국비 3,300, 도비 1,500, 시군비, 6,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	11,000	7,100	200	400	3,300
국 비	3,300	3,300	-	-	-
시 도 비	1,500	500	-	-	1,000
시군구비	6,200	3,300	200	400	2,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ‘09. 10. 19 : 실시설계 완료

○ ‘09. 12 ~ ’13. 09  : 보상협의(120건 중 87건 협의 완료)

○ ‘12. 07. 30 : 공사 착공(L=560m)

○ ‘13. 12     : 공사 준공(1차구간)

○ ‘14. 01 ~  : 잔여구간(L=690m) 년차별 예산확보 보상 및 공사시행

□ 향후계획

○ ‘14. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

해양낚시공원조성사업

담당자

해양수산과 박종석

(☎831-3110)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 수요충족 및 도시민의 바다접근성 도모

○ 새로운 관광기반시설 구축으로 지역경제 활성화 및 어업외 소득창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010~2014(5년간)

○ 위 치 : 사천시 서포면 비토 낙지포항~별학도 연안

○ 규 모 : 낚시잔교 270m, 보행잔교 228m, 낚시안내소 등 편의시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,000	2,440	1,290	1,270	-
국 비	2,500	1,227	643	630	-
시 도 비	750	369	192	189	-
시군구비	1,750	844	455	451	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ‘10. 05 ～ 2011. 07 : 실시설계 용역

○ ‘11. 06. ~ 10. : 인공어초시설사업 착ㆍ준공

○ ‘11. 11. : 토목공사 착공(총괄계약)

○ ‘12. 02. : 전기, 통신공사 착공

○ ‘13. 09. : 해상구조물 공사 착공(총괄계약)

○ ‘14. 05. : 토목․전기․통신공사 준공

○ ‘14. 10. : 해상구조물 공사 준공(예정)

○ ‘14. 12. : 해양낚시공원 운영(예정)

□ 향후계획

○ ‘14. 10 : 해상구조물공사 준공

○ ‘14. 11 : 시설물 위탁관리조례 제정

○ ‘14. 12 : 해양낚시공원 운영개시

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

신벽소하천 정비공사

담당자

건설과 윤현찬

☎831-3270)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을(취락지)을 관통하고 있는 소하천으로 미개수 하천의 하폭 및 통수단면이 부족, 수위가 상승하고 하천제방단면 및 하천횡단 구조물(보, 교량 등)의 규모미달로 인하여 과거 취락지, 농경지 등 침수사례가 있는 지구로서 본 사업을 시행하여 인명피해 및 재해 발생 사전 예방 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.09.12~2014.09.11

○ 위 치 : 사천시 신벽동 일원

○ 규 모 : 하천개수 L=0.857km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,901백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,901	-	870	2,031	-
국 비	1,450.5	-	435	1,015.5	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,450.5	-	435	1,015.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○‘14. 03. 17 : 실시설계용역 준공

○‘13. 02. 22 : 실시설계 용역 완료

○‘13. 03. 29 : 소규모환경영향평가용역 완료

○‘13. 07. 10 : 소하천정비사업 사전 실시설계 검토 완료

○‘13. 08. 06 : 소하천정비시행계획 공고(사천시 공고 제2013-531호)

○‘13. 09. 12 : 공사착공

□ 향후계획

○‘14.09. 11 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

벌용동주민센터 이전 신축사업

담당자

건축과 이중기

(☎055-831-3216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벌용동주민센터 노후화[1987년 준공]로 기능성 저하 및 민원인불편 가중

○ 근무자의 쾌적한 사무환경 제공으로 민원서비스의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 1월 ~ 2015년 06월

○ 위 치 : 사천시 벌리동 27-1번지 외 2필지

○ 규 모 : 지상2층/연면적 999.70㎡/태양광발전설비설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,620백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,620	270	50	100	130
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,620	270	50	100	130
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 설계완료

○ 공사입찰 중(공고 중)

□ 향후계획

○ 2014. 08월 공사착공

○ 2015. 06월 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 재원(시비1,000백만원, 지방채1,300백만원)

○ 현재 : 재원(시비2,620백만원)

○ 사유 : 태양광발전설비, 친환경, 무장애건축 등 의무사항 추가로 공사비증액(320백만원) 및 재원조달 계획변경으로 조정

사업명

곤양생활체육시설 조성

담당자

체육지원과 남형래

(☎831-2415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서부지역의 열악한 체육시설 확충으로 체육서비스 소외감 해소 및 건강       증진⦁여가활용시설 확충으로 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2015

○ 위 치 : 곤양면 서정리 77번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 22,710㎡[축구장1면, 궁도장1면, 주차장 등]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,900	293	310	550	2,747
국 비	800	147	201	-	452
시 도 비	700	-	-	-	700
시군구비	2,400	146	109	550	1,595
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 부지보상 진행 중

○ 도시관리계획 등 인허가 추진 중

□ 향후계획

○ ‘14. 12. : 부지보상 및 인허가 완료

○ ‘15.01. ~ 12. : 공사착수 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

초양도 관광거점마을 만들기

담당자

전략사업담당관실 박용국

(☎831-2285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바다와 육지를 잇는 해상케이블카 하부 역사인 초양도를 개발하여 해양       관광 산업 육성 및 일자리 창출

○ 해양친수 관광거점마을 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활력 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2017. 06.

○ 위 치 : 경상남도 사천시 동서동 일원(초양도)

○ 규 모 : 해변둘레길 1km, 관광센터 A=650㎡, 전망대(2개소) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,850백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,850	-	20	600	4,230
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,425	-	-	300	2,125
시군구비	2,425	-	20	300	2,105
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2012. 10. : 지역균형발전 사업 발굴계획 수립

○ 2013. 01. : 지역균형발전사업 수정심의 채택(경상남도)

○ 2013. 03. : 사천시 지방재정 투․융자 심사 완료(조건부)

○ 2013. 08. : 기본계획 용역 시행(20백만원)

※ 추진 : 경남도 지역균형발전사업(도비지원사업)선정

○ 2014. 01. : 기본계획 수립

○ 2014. 05. : 실시설계 및 국립공원계획변경 용역 시행

□ 향후계획

○ 2015. 02. : 공사 착공

○ 2017. 08. : 공사 준공

사업명

문화공원 조성사업

담당자

전략사업담당관실 박용국

(☎831-2285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복합지원시설 및 휴게시설 등 문화공원 조성으로 이용객 편익 제공

○ 주변 관광자원과 연계한 체류형 관광지 개발을 위한 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 경상남도 사천시 대방동 일원

○ 규 모 : A=12,570㎡(복합지원시설, 광장, 주차장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,100백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,100	-	-	300	7,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,100	-	-	300	7,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2012. 11. : 중간역사 타당성검토 및 교통 영향분석 용역발주

○ 2013. 06. : 중간역사 설치를 위한 사업계획 변경협의(환경부)

○ 2013. 08. : 중간역사위치 타당성 검토 기본계획 및 교통영향분석 개선대책 수립

○ 2013. 10. : 중기지방재정계획 반영

○ 2013. 11. : 지방재정 투․융자 자체 심사 승인(조건부)

○ 2013. 12. : 도시계획시설(공원)결정 및 지형도면 승인 고시

○ 2014. 03. : 조성계획 실시설계 용역 실시

□ 향후계획

○ 2015. 06. : 공사 착공

○ 2016. 12. : 공사 준공

사업명

실안 노을 레일바이크 설치사업

담당자

전략사업담당관실 김성관

(☎831-3130)

□ 사업목적 및 필요성

○ 실안관광지 일원의 활성화로 지역경제 발전과 지역개발효과

○ 해안변의 수려한 자연경관을 관람하고 체류할 수 있는 체류형 관광 인프라 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 사천시 실안동 실안마을 일원

○ 규 모 : 레일바이크 L=2.5km(왕복), 휴식공간 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,800	-	-	2,000	2,800
국 비	2,400	-	-	1,000	1,400
시 도 비	720	-	-	300	420
시군구비	1,680	-	-	700	980
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2013. 02. 19 : “실안노을 레일바이크 설치” 지역균형발전사업 추진계획 수립

○ 2013. 03. 28 : 레일바이크 사업 투․융자 사업심사(사천시)

○ 2013. 04. 04 : 타당성 조사 용역 시행 의뢰

○ 2013. 05. 03 : 2014년도 지역균형발전사업(광특사업) 신청

○ 2013. 08. 20 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

○ 2013. 12. 27 : 실시설계 실시설계용역 일상감사

○ 2013. 12. 31 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 계약심사

○ 2014. 02. 14 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2014. 02월~10월 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역

○ 2014. 11월 : 착공

○ 2016. 10월 : 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

노인복지 종합타운 조성사업

담당자

전략사업담당관실 김성관

(☎831-3130)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령사회에 접어든 어르신들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공

○ 날로 다양해져 가는 어르신들의 욕구에 부응하는 종합복지시설 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 사천시 서포면 자혜리 산 23-7번지 일원

○ 규 모 : 부지 62,000㎡, 건물 7,171㎡(지상1층, 3개동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	20,000	-	-	1,500	18,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20,000	-	-	1,500	18,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2011. 03. 31 : 사천시 노인복지종합타운 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수

○ 2011. 09. 07 : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료

○ 2013. 06. 12 : 사천시 시정조정위원회 개최(장소선정 : 사천대교 휴게소 주변지역)

○ 2014. 01. 16 : 공유재산 심의(사천시)

○ 2014. 02. 04 : 공유재산 관리계획 심의(시의회승인)

○ 2014. 05. 19 : 서포 자혜지구 매립지 매립목적변경(경상남도)

□매립목적 : 농지 및 어민공동작업장 → 사회복지시설(노유자시설)

□ 향후계획

○ 2014. 10 : 도시계획시설 결정 용역(사회복지시설)

- 재해영향성검토, 전략환경영향평가, 문화재 지표조사

○ 2014. 10 : 감정평가 및 필지별 보상협의

○ 2014. 12 : 실시설계 및 인가․고시 시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

용강주공A~용두간 도로개설

담당자

도시과 김수언

(☎831-3167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획도로개설로 주민생활불편 해소

○지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 위    치  : 사천시 용강동 일원

○ 사업기간  : 2007 ~ 2016(10년간)

○ 사 업 량  : L=860m, B=25m

○ 총 사업비 : 9,500백만원(국비 - , 도비 - , 시군비, 9,500, 기타  )

○ 사업 내용 : 도로개설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	9,500	700	500	550	7,750
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,500	700	500	550	7,750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘07. 12 : 실시설계 완료

○ ‘11년 ~ ’13. 09 현재 : 보상협의중(8필지 협의완료)

○ ‘14. 01 : 편입토지 보상

○ ‘14. 03 : 공사착공

○ ‘14. 04 : 관로공 설치 완료

○ ‘14. 05 : 보도 경계석 설치, 보강토 옹벽 설치

□ 향후계획

○ '16. 12 : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

국도3호선 ~ 신도시간 도로개설

담당자

도시과 김수언

(☎831-3167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시군 통합 당시 신도시 조성을 통합의 전제조건으로 제시한 정부의 적극적        권고와 약속 사항

○ 지역균형 개발 및 통합 시민의 일체감 조성과 신청사를 이용하는 방문객과 시민들의 통행불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009년 ~ 2014년

○ 위    치 : 사천시 용현면 일원

○ 시 공 사 : (주)삼전건설 황기옥

○ 사업규모 : 도로개설 L=750m, B=25 ~ 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,200백만원(도비 10,000, 시비 1,200)

(단위 : 백만원))

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	11,200	8,000	2,000	1,200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,200	8,000	2,000	1,200	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ ‘09. 03     : 실시설계완료

○ ‘11. 08      : 계약심사 완료(경상남도)

○ ‘11. 09. 30 : 공사착공

○ ‘11. 12     : 보상협의 완료(본선구간)

○ ‘12. 11. 07 : 국도3호선 연결부 비관리청 공사시행 허가

○ ‘13. 07 ~ : 교통광장 추가 매입 (14필지 협의, 4필지 미협의),

공사중(공정 95%)

□ 향후계획

○ ‘14. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당사항없음

사업명

시도12호선 확․포장

담당자

도시과 김수언

(☎831-3167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사천산업단지의 출․퇴근시 급격한 교통량 증가로 상습적인 정체

○ 물동량 수송 용이 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013년 ~ 2014년

○ 위    치 : 사천시 사천읍 수석리 일원

○ 시 공 사 : 수영건설(주) 강 봉 수

○ 사업규모 : 도로개설 L=265m, B=35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39억원(국비 18, 시비 30)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,900	1,800	1,800	300	-
국 비	1,800	900	900	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,100	900	900	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ ‘12. 03월 : 토지보상 추진

○ ‘13. 03월 : 공사 착공(L=265m)

□ 향후계획

○ ‘14. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

사천초등학교~사천중학교간

도시계획도로개설

담당자

도시과 정오식

(☎ 831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주요시설 및 교통 취약지 주변 도시계획도로에 대한 조기 개설로 교통망 확충과 도시개발 도모

□ 사업개요

○ 위    치  : 사천시 사천읍 정의리 일원

○ 사업기간  : 2011 ~ 2014(4년간)

○ 사 업 량  : 도로개설 L=500m, B=10m→15m

○ 사업내용 : 도로 확포장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총 사업비 : 3,820백만원(국비 500, 시군비 3,320)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,820	1,440	2,200	180	-
국 비	500	500	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,320	940	2,200	180	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘12. 05월 : 실시계획 인가고시(사천시고시 제2012-85호)

○ ‘12. 12월 : 사업착공

○ ‘13. 12월 : 보상완료

□ 향후계획

○ ‘14. 08월 : 사업준공 예정

□ 사업변경 내역: 해당없음

사업명

각산주변 산복도로 개설

담당자

도시과 정오식

(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전도모

○ 장기미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 남양동 일원

○ 사업기간 : 2006 ~ 2016(11년간)

○ 사 업 량 : 도로개설 L=2,400m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(시군비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,000	2,400	200	190	2,210
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	2,400	200	190	2,210
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘13. 05. 14. 공사착공

○ ‘13. 01 ~ 12월 : 보상계획 통지 및 보상협의

○ 2014년분 공사추진

□ 향후계획

○ ‘15. 01월 ~ ’18. 12월 : 보상 및 공사 추진

○ ‘16. 05월 : L=720m 구간 사업준공예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

남양중학교~모충공원간

도시계획도로 개설

담당자

도시과 정오식

(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보도 설치로 보행자 통행편의 제공 및 교통사고 방지

○ 학생들의 안전한 통학로 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 남양동 일원

○ 사업기간 : 2005 ~ 2019(15년간)

○ 사 업 량 : 도로개설 L=1,200m, B=20m

○ 사업내용 : 도로 확포장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원(국비   ,  도비 500 ,  시군비 6,500,  기타    )

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,000	1,580	300	300	4,820
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	6,500	1,080	300	300	4,820
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘13. 01 ~ 06월 : 보상계획 통지 및 보상협의

○ `14. 07 ~      : 지장가옥 철거

□ 향후계획

○ 2014. 8 : 공사발주

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

지방도 1016호선 우회도로개설

담당자

도시과 강호명

(☎831-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화력발전소 등 물동량 수송 차량 시가지 통과로 인한 교통 체증 발생 해소

○ 국가산업단지 조성계획 등에 따른 물동량 수송로 대비

□ 사업개요

○ 위    치  : 사천시 용강․향촌동일원

○ 사업기간  : 2006 ~ 2015년(10년간)

○ 사 업 량  : L=2.12km, B=30m

○ 사업 내용 : 도로개설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총 사업비 : 25,000백만원(국비 1,000 , 도비 2,000, 시군비, 22,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	25,000	13,000	3,800	1,100	7,100
국 비	1,000	500	500	-	-
시 도 비	2,000	1,300	700	-	-
시군구비	22,000	11,200	2,600	1,100	7,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 1차공사 (용강주공아파트 뒤쪽) ⇒ 2007년 준공

○ 2차공사 (지방도1016호선~운동장 진입도로) ⇒ 2013년 준공

○ 3차공사 (향촌신호등 ~ 지방도1016호선) ⇒ 공정60%

□ 향후계획

○ 잔여구간 보상(운동장 ~ 용강주공아파트) : 2015년 ~

○ 3차공사준공(향촌신호등 ~ 지방도1016호선) : 2015. 05.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

소곡마을 하수도설치사업

담당자

하수도사업소 허성훈

(☎055-831-5549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수질오염 예방으로 양질의 농업용수 확보 및 주거생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011.06.09 ~ 2013.11.14

○ 위 치 :  정동면 소곡리 소곡, 이동, 가곡마을 일원

○ 규 모 :  시설용량 Q=50㎥/일, 차집관로 L=8.39km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,126백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,126	837	1,289	-	-
국 비	1,488	586	902	-	-
시 도 비	319	125.5	193.5	-	-
시군구비	319	125.5	193.5	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 공사완료 및 하수처리장 정상운용

□ 향후계획

○ 시설물 유지관리

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

우천마을 하수도설치사업

담당자

하수도사업소 허성훈

(☎055-831-5549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수질오염 예방으로 양질의 농업용수 확보 및 주거생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012.06.25 ~ 2014.04.16

○ 위 치 :  사남면 우천리 우천,연천마을 일원

○ 규 모 :  시설용량 Q=40㎥/일, 차집관로 L=6.95km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,043백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,043	286	1,757	-	-
국 비	1,430	200	1,230	-	-
시 도 비	306.5	43	263.5	-	-
시군구비	306.5	43	263.5	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 공사완료 및 하수처리장 정상운용

□ 향후계획

○ 시설물 유지관리

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

홀곡마을 하수도 설치사업

담당자

하수도사업소 허성훈

(☎055-831-5549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수질오염 예방으로 양질의 농업용수 확보 및 주거생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013.11.08 ~ 2015.03.17.

○ 위 치 :  이홀동 홀곡마을, 사남면 계양리 진분계마을 일원

○ 규 모 :  시설용량 Q=70㎥/일, 차집관거 L=6.95km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,076백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,076	-	430	1,646	-
국 비	1,512	-	300	1,212	-
시 도 비	282	-	65	217	-
시군구비	282	-	65	217	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50 %)

○ '09. 09. 01 : 투․융자 심사 완료

○ '10. 10. 27 : 실시설계 용역 완료

○ '13. 11. 18 : 공사착공

○ '14. 6월말 : 하수처리장 설치 및 관로 터파기 중

□ 향후계획

○ ‘15 .03 : 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

하수슬러지 처리시설 설치사업

담당자

하수도사업소 조용기

(☎055-831-5550)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소화조에서 발생하는 바이오가스를 슬러지 건조용으로 재활용

○ 건조된 하수슬러지를 삼천포화력발전소 발전열원으로 판매

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 01 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 사천시 환경길 55 삼천포공공하수처리시설내

○ 규 모 : 건조기 Q= 20㎥/일 설치 1식

- 밀폐형 보관시설 50㎥ 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,000	-	-	714	3,286
국 비	2,800	-	-	500	2,300
도 비	600	-	-	107	493
시 비	600	-	-	107	493

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 2013. 10. 15. : 환경부 국고보조사업 통보

○ 2014. 03. 18. : 지방재정 투·융자심사

○ 2014. 05. 09. : 한국환경공단 공사업무 위탁협약

□ 향후계획

○ 2014. 08 : 기본 및 시설설계 용역 착수

○ 2015. 04 : 기본 및 시설설계 용역 준공

○ 2015. 05 : 재원협의 및 계약심사

○ 2015. 06 : 공사 착공

○ 2015. 12 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음