개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

벌용동사무소 이전․신축사업

담당자

행정과

김성훈(☎831-2565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건물노후화, 주차장부족, 교통혼잡 등 민원불편사항 해소

○ 쾌적한 사무공간 확보로 시민편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014. 08. 25. ~ 2015. 07. 01.

○ 위 치 : 사천시 벌용길 60

○ 규 모 : 지상2층, 연면적 999.70㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,300	0	1,000	1,300	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	0	1,000	1,300	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2011. 10. 17 : 공유재산 심의

○ 2014. 02. 14 : 실시설계 완료

○ 2014. 03. 31 : 지방재정 투융자심사

○ 2014. 08. 25 : 착공

□ 향후계획

○ 2015. 07. 01 : 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

사천시 장애인 국민체육센터 건립

담당자

주민생활지원과

허정두(☎831-2626)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인 체육복지 및 생활체육 활성화 공간 조성

○ 장애인의 자립생활 능력 향상 및 정서적 안정과 사회성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018년

○ 위 치 : 사천시 용현면 덕곡리 536-17번지 일원

○ 규 모 : 체육센터 1동(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,500	-	-	2,000	6,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,500	-	-	1,000	2,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타 (국민체육진흥기금)	5,000	-	-	1,000	4,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘14. 8월 : 사천시 장애인 국민체육센터 건립 계획 수립

○ ‘14. 9월 ~ ’15. 2월 : 건립에 따른 사전 행정절차 이행 완료

(공유재산 심의 및 관리계획 의결, 지방재정 투․융자 심사 통과,

중기지방재정계획 반영, 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역)

○ ‘15. 5월 : 건립 지원대상 지역 확정

○ ‘15. 6월 : 기금 지원금 50억원중 1차년도 사업비 10억원 수령

〔총사업비 85억원중 1차년도 사업비 20억원(기금10/시비10) 확보〕

□ 향후계획

○ ‘15. 7 ~ 12월 : 실시설계용역 및 인․허가

○ ‘16. 3월 ~ ’17. 12월 : 공사시행 및 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

사천시 여성회관 건립

담당자

사회복지과

박지현(☎831-2665)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여성의 사회참여 확대에 따른 통합적인 관리 및 지원시설 필요

○ 여성관련 전용시설 부재로 인한 여성의 오랜 숙원사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년∼2016년

○ 위 치 : 용현면 금문리 51-1일원

○ 규 모 : 부지 4,824㎡, 건물 2,640㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,000		900	1,230	4,870
국 비
시 도 비	1,500				1,500
시군구비	5,500		900	1,230	3,370
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 공유재산 관리계획 반영	: ‘13. 12월

○ 도시계획시설결정 및 사전재해영향성검토 용역착공  : ‘13. 12월

○ 지방재정 투․융자 심사 결정(경남도)	: ‘14.  3월

○ 도시관리계획(용도지역 변경)결정(경남도)            : ‘14.  5월

○ 부지 감정평가 실시	: ‘14. 10월

※ 부지보상(7필지 완료, 2필지 미협의)

□ 향후계획

○ 부지 보상협의 및 실시설계 등               : ’15년  4월 ~ 12월

○ 공사 착공	: ’16년  3월

○ 공사 준공                                  : ’16년 12월

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

사업명	당초사업비			변경사업비			변경사유	비고
	계	도비	시비	계	도비	시비
여성회관 건립	5,000	1,500	3,500	7,000	1,500	5,500	건물 신축 사업비 부족으로 증액 불가피 (당초 30억 → 변경 50억)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

미집행 도시계획시설

[사천종합운동장] 부지 매수

담당자

체육지원과

김용준(☎831-2422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1978. 11. 10. 최초 지정․고시된 사천종합운동장은 조성이 완료되지 않아      장기간 개인 재산권 제한으로 민원이 발생하고 있음.

○ 이러한 문제를 해소하고, 미래지향적이고 종합적인 체육시설의 조성을       통하여 체육복지증진에 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년(5년)

○ 위 치 : 사천읍 정의리 7번지 일원[사천종합운동장]

○ 규 모 : 35필지 19,828㎡ 중 14,141㎡ 정도 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	-	-	200	4,800
국 비
시 도 비
시군구비	5,000	-	-	200	4,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014.04.17. : 시정조정위원회 개최[매수순위 결정]

○ 2014.05.20. : 공유재산심의회 개최[의결]

○ 2014.06.23. : 공유재산관리계획 반영[제178회 사천시의회 임시회]

○ 2014.10.16. : 지방재정 투융자심사[조건부-중기지방재정계획반영]

□ 향후계획

○ 2015. ~ 2019. : 단계별 부지 매수 시행

□ 사업변경 내역                                          (단위 : 백만원)

구분	계	2015	2016	2017	2018	2019	비고
당초	5,000	1,000	900	1,100	700	1,300
변경	5,000	200	1,100	1,300	900	1,500

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

제25회 경상남도생활체육대축전

담당자

체육지원과

조수옥(☎831-2411)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제25회 경상남도 생활체육대축전 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 10. 17. ~ 10. 19.

○ 위 치 : 사천시 일원

○ 규 모 : 제25회 경남생활체육대축전에 임원․선수 8,276명 참가

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	900		900
국 비
시 도 비	12		12
시군구비	888		888
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제25회 경남생활체육대축전을 성공적으로 치러냄

○ 5개 종목 우승 : 육상, 패러글라이딩, 자전거, 생활체조, 복싱

○ 18개 시․군 8,276명의 선수와 임원이 참여

□ 향후계획

○ 해당 없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

곤양생활체육시설 조성

담당자

체육지원과

김용준(☎831-2422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서부지역의 열악한 체육시설 확충으로 체육서비스 소외감 해소 및 건강       증진⦁여가활용시설 확충으로 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2016

○ 위 치 : 곤양면 서정리 77번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 22,710㎡[축구장1면, 주차장 등 부대시설]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,200	604	-	1,596
국 비	350	350	-	-
시 도 비	350	-		350
시군구비	1,500	254	-	1,246
지 방 채	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

❍ ‘12.02. ~ 04.       : 사업대상지 확정 및 사업추진 결정

❍ ‘12.07. ~ ’15.07.    : 보상대상 11필지[14,649㎡] 보상완료

❍ ‘13.09. ~ 10.       : 공유재산심의회 가결 및 관리계획 반영

❍ ‘13.11.07.          : 지방재정 투융자심사 완료

❍ ‘14.08. ~ ’15.01.    : 농업진흥구역 해제 완료

❍ ‘14.10. ~ ’15.06.    : 도시계획(체육시설) 결정

□ 향후계획

❍ ‘15.07. ~ 10.       : 실시계획인가 협의

❍ ‘15.11.             : 공사 착공

❍ ‘16.12.             : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

항공우주산업 특화단지 지원

담당자

항공산업과

이상선(☎831-3465)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 항공산업 가공기술의 R＆D영역 경쟁력 확보

○ 생산여력 및 물류, 원자재확보 및 관리 등에 대한 수용 능력 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 9. ~ 2018. 8.

○ 위 치 : 종포일반산업단지, 사천항공임대전용산업단지

○ 규 모 : 중소 부품업체 항공 R＆D 지원, 공용연구/생산 장비 지원, 항공 물류시스템 구축, 항공인력 교육 및 육성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  47,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	47,200		6,000	14,700	26,500
국 비	25,000		2,000	6,500	16,500
시 도 비	4,000				4,000
시군구비	11,200		3,000	4,200	4,000
지 방 채
민간자본	7,000		1,000	4,000	2,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 표면처리시설 건축설계 업체 선정

□ 향후계획

○ ‘15.11. ~ ’16.11. : 표면처리시설 착공 및 준공, 시설평가장비 시설 구축

○ ‘16.11. ~ ’17.11. : 물류센터시설 구축 착공 및 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

종포일반산업단지 조성

담당자

항공산업과

이상선 (☎831-3465)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항공산업의 클러스트를 구축하여 항공산업의 중심도시로 육성

○ 항공산업의 신 성장동력 기반 마련 및 지역 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘14. 11. 24 ~ ’16. 11. 22

○ 위 치 : 사천시 용현면 신촌리 472-24번지 일원

○ 규 모 : 산업단지 A=376,125㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 63,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	63,000		44,000		19,000
지 방 채	63,000		44,000		19,000
국 비
시 도 비
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ ‘14. 11. 24 : 공사 착공

○ ‘15. 06. 18 : 산업단지계획(변경) 심의위원회 개최

□ 향후계획

○ ‘15. 07. ~ 09. : 산업단지관리기본계획 수립 및 선분양

○ ‘16. 11. : 사업완료

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

송포마을권역 종합정비

담당자

해양수산과

박종석(☎831-3135)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민소득기반 확충 등을 통한 도시민의       인구유입 및 지역별 특색 있는 발전도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2017.(4년)

○ 위 치 : 사천시 대방동, 실안동 일원

○ 규 모 : 마을권역종합정비 1개권역

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,498백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,498	0	347	476	2,675
국 비	2,362	-	243	301	1,818
시 도 비	304	-	31	39	234
시군구비	708	-	73	90	545
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	124	-	-	46	78
기 타	0	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ‘13. 04. ~ 10. : 신규사업 사업성 검토심의 및 선정(농림수산식품부)

○ ‘14. 05. : 위탁시행(한국농어촌공사 사천지사)

○ ‘14. 07 ~ ’15. 06. : 기본계획수립 용역실시

□ 향후계획

○ ‘15. 07. : 사업승인(경남도)

○ ‘15. 07.~12 : 실시설계용역

○ ‘16. 02. ~ ‘17. 12 : 착․준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

사천시 소하천정비 종합계획

(변경)수립 용역

담당자

건설과

구자회(☎831-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○「소하천정비법」제6조 제1항의 규정 상 소하천정비종합계획을 10년마다       수립하여 시․도지사의 승인을 받도록 규정하고 있는 법정사무임.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016년(3년간)

○ 위 치 : 사천시 관내 소하천(86개소)

○ 규 모 : 소하천정비 종합계획 L=127.2㎞, 전략환경영향평가 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,400	800	128	500	1,100
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	800	128	500	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  18%)

○ ‘14. 1월 : 시행계획 방침 수립

○ ‘14. 9월 : 사업수행능력평가 및 업체선정

○ ‘14. 9월 : 용역 착수(총괄분, 2014년도분)

○ ‘15. 5월 : 용역 착수(2015년도분)

○ ‘15. 6월 : 전략환경영향평가 용역 발주

□ 향후계획

○ ‘15. 7월 : 전략환경영향평가 용역 착수

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

삼천포지구 하수관거정비사업

담당자

상하수도사업소

정오식(☎831-5546)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 04. 27 ~ 2014. 12. 30

○ 위 치 : 사천시 선구동, 동서동, 동서금동 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=80.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	19,900	10,899	9,001	-	-
국 비	13,930	8,157	5,773
시 도 비	0
시군구비	5,970	2,742	3,228
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '09. 04. 27 : 공사 착공

○ '09. 07. 14 : 책임감리용역 착수

○ '14. 12. 30 : 공사 준공

○ '15. 01. 15 : 책임감리용역 준공

□ 향후계획

○ 유지관리

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

용현지구 하수관거정비사업

담당자

상하수도사업소

정오식(☎831-5546)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 06. 28 ~ 2014. 05. 30

○ 위 치 : 사천시 용현면 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=52.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,524백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	13,524	8,480	5,044	-	-
국 비	9,467	7,105	2,362	-	-
시 도 비	0
시군구비	4,057	1,375	2,682	-	-
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '10. 11. 24 : 공공하수도 설치인가 및 고시

○ '14. 05. 30 : 총괄분 준공

□ 향후계획

○ 유지관리

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

삼천포지구 하수관거 개․보수사업

담당자

상하수도사업소

정오식(☎831-5546)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 01. ~ 2016. 12

○ 위 치 : 사천시 동지역 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=10.509km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,569백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	12,569	740	0	3,943	7,886
국 비	7,442	254		1,563	5,625
시 도 비	0
시군구비	5,127	486		2,380	2,261
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ '12. 01. 18 : 사업예산 확정(수질총량관리과-360)

○ '12. 03. 16 ~ 06. 23 : 사업타당성 조사용역(19.7백만원)

○ '13. 04. 09 ~ 11. 08 : 기본 및 실시설계용역(588백만원)

○ '14. 12. 03 : 총 사업비 변경 승인

○ '15. 04. 22 : 공법선정을 위한 신기술활용 심의

○ '15. 06. 26 : 관로분야 일상감사 완료

○ '15. 07. 03 : 폐기물분야 일상감사 완료

□ 향후계획

○ ‘15. 7. : 경상남도 계약심사 의뢰(관로 및 폐기물 분야)

○ ‘15. 8. : 공사발주

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

사천지구(2단계) 하수관거정비사업

담당자

상하수도사업소 황용찬(☎831-5547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 마련과 시민의 위생환경 증진

○ 공공수역의 수질보전과 맑은물 관리센터의 경제적인 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01. ~ 2017. 11

○ 위 치 : 사천시 사천읍 용당․구암리, 사남면 유천리, 축동면 배춘리 일원

○ 규 모 : 하수관로 L=12.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,393백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	17,393	302	56	5,470	11,565
국 비	12,175	71	39	3,528	8,537
시 도 비	0
시군구비	5,218	231	17	1,942	3,028
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ '11. 03. 25 : 지방재정 투․융자심사(적정)

○ '11. 05. 12 ~ ‘12. 01. 15 : 실시설계용역 시행(관거분야)

○ '13. 08. 29 : 재원협의 서류 제출(시→낙동강유역환경청)

○ '14. 05. 27 : 계약심사 완료

○ '14. 11. 24 : 총괄분 및 2014년분 착공

○ '15. 04. 01 : 2015년분 착공

□ 향후계획

○ ‘15. 11. 23 : 2014년분 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

우천마을 하수도설치사업

담당자

상하수도사업소

정오식(☎831-5546)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수질오염 예방으로 양질의 농업용수 확보 및 주거생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012.06.25 ~ 2014.06.24

○ 위 치 :  사남면 우천리 우천, 연천마을 일원

○ 규 모 : 하수처리시설 설치 Q=40㎥/일, 차집관로 설치 L=6.95km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,043백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,043	1,306	737
국 비	1,430	914	516
시 도 비	306.5	196	110.5
시군구비	306.5	196	110.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ '12. 06. 25 : 공사 착공

○ '14. 06. 24 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 시설물 유지관리

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

홀곡마을 하수도설치사업

담당자

상하수도사업소 장성재(☎831-5548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수질오염 예방으로 양질의 농업용수 확보 및 주거생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013.11.08 ~ 2015.09.17.

○ 위 치 :  이홀동 홀곡마을, 사남면 계양리 진분계마을 일원

○ 규 모 :  하수처리시설 설치 Q=70㎥/일, 차집관로 설치 L=6.95km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,161백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,161	114	1,020	1,027
국 비	1,512	80	706	726
시 도 비	325	17	157	151
시군구비	324	17	157	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80 %)

○ '09. 09. 01 : 투․융자 심사 완료

○ '10. 10. 27 : 실시설계 용역 완료

○ '13. 11. 18 : 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘15. 09. 17 : 공사 준공 예정

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

삼천포하수처리장 시설개량사업

담당자

상하수도사업소 김수용

(☎831-5551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동절기 공공하수처리시설 수질기준 강화에 따른 법적 수질기준 준수

○ 연안지역 수질오염을 개선하여 남해안 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 01. ~ 2017. 05.

○ 위 치 : 사천시 환경길 55 삼천포공공하수처리시설내

○ 규 모 : 처리시설 Q=43,000㎥/일 시설개량

- 총인 및 총질소 저감시설 1식

- 반응조 덮개 및 반응조 탈취기 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	16,000	4,391	1,820	3,270	6,519
국 비	8,000	1,840	711	1,635	3,814
도 비	4,000	1,276	-	490	2,234
시 비	4,000	1,275	1,109	1,145	471

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 2012. 01. 18. : 환경부 국고보조금 확정통보

○ 2012. 04. 09. : 지방재정 투·융자심사

○ 2013. 09. 02. : 경남도 건설기술심의(VE) 의결

○ 2013. 12. 11. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료

○ 2013. 12. 23. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 01. 10. : 경상남도 공공하수도 변경인가

○ 2014. 02. 28. : 경상남도 계약심사 완료

○ 2014. 05. 09. : 한국환경공단 공사업무 위탁협약

○ 2014. 08 : 한국환경공단 설계도서 검토

□ 향후계획

○ 2015. 04 : 시공사 선정

○ 2015. 05 : 공사 착공

○ 2017. 05 : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지 감량화 사업

담당자

상하수도사업소 김수용

(☎831-5551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유기성 자원을 신재생 에너지화하여 에너지 자립화율 증대

○ 소화효율 증대로 슬러지 감량에 따른 슬러지 육상처리 비용 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 01 ~ 2017. 05

○ 위 치 : 사천시 환경길 55 삼천포공공하수처리시설내

○ 규 모 : 소화조 Q= 4,020㎥ 시설개량

- 소화조 교반시설, 가온방식, 가용화설비 개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,010백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,010	3,057	1,812	367	774
국 비	4,207	1,930	1,420	257	600
도 비	901	716	88	33	65
시 비	902	411	304	77	109

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 2011. 10. 21. : 지방재정 투·융자심사

○ 2012. 01. 18. : 환경부 국고보조금 확정통보

○ 2013. 11. 14. : 낙동강유역환경청 재원협의 완료

○ 2013. 12. 23. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 02. 12. : 경상남도 계약심사 완료

○ 2014. 05. 09. : 한국환경공단 공사업무 위탁협약

○ 2014. 08 : 한국환경공단 설계도서 검토

□ 향후계획

○ 2015. 04 : 시공사 선정

○ 2015. 05 : 공사 착공

○ 2017. 05 : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

곤양하수처리장 시설개량사업

담당자

상하수도사업소 정영복

(☎831-5550)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동절기 공공하수처리시설 수질기준 강화에 따른 법적 수질기준 준수

○ 연안지역 수질오염을 개선하여 남해안 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01 ~ 2015. 02

○ 위 치 : 사천시 곤양면 석문길 40 곤양공공하수처리시설내

○ 규 모 : 처리시설 Q=43,000㎥/일 시설개량

- 생물반응조 시설개량 1식, 계측 및 제어설비 개량 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 680백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	680	428	252	-	-
국 비	476	300	176	-	-
도 비	102	64	38	-	-
시 비	102	64	38	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2013. 01. 09. : 환경부 국고보조금 확정통보

○ 2013. 03. 29. : 지방재정 투·융자심사

○ 2013. 07. 12. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 05. 21. : 낙동강유역환경청 재원협의

○ 2014. 05 ~ 06 : 일상감사 및 계약심사

○ 2014. 08. 14. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2015. 02  : 준공예정

□ 사업변경 내역

○ 변경사유 : 기존공법 시설개량으로 재설계(재원협의 보완사항)

○ 변경내역

구 분	당초	현재
사업규모	처리공법 개량(변경) 1식	기존공법 시설개량 1식
총사업비	2,116(국1,481, 도317, 시318)	680(국476, 도102, 시102)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

하수슬러지 처리시설 설치 사업

담당자

상하수도사업소 김수용

(☎831-5551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소화조에서 발생하는 바이오가스를 슬러지 건조용으로 재활용

○ 건조된 하수슬러지를 삼천포화력발전소 발전열원으로 판매

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 01 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 사천시 환경길 55 삼천포공공하수처리시설내

○ 규 모 : 건조기 Q= 20㎥/일 설치 1식

- 밀폐형 보관시설 50㎥ 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,000	-	714	1,642	1,644
국 비	2,800		500	1,150	1,150
도 비	600		107	148	345
시 비	600		107	344	149

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 2013. 10. 15. : 환경부 국고보조사업 통보

○ 2014. 03. 18. : 지방재정 투·융자심사

○ 2014. 05. 09. : 한국환경공단 공사업무 위탁협약

○ 2014. 08 : 기본 및 시설설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2015. 05 : 기본 및 시설설계 용역 준공

○ 2015. 07 : 재원협의 및 계약심사

○ 2015. 12 : 공사 착공

○ 2016. 12 : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

초양도 관광거점 마을 만들기 사업

담당자

도로과

박용국(☎831-2285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해상케이블카 중간 역사인 초양도에 케이블카와 연계한 평의시설 및 해양친수 관광거점마을 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2017년

○ 위 치 : 사천시 동서동 일원(초양도)

○ 규 모 : 해변둘레길 720m, 마을쉼터 900㎡, 보행육교 42m, 전망대 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,850		48	1,152	3,650
국 비
시 도 비	2,425		48	552	1,825
시군구비	2,425			600	1,825
기 타

□ 추진상황(공사착공 및 진도 : 15%)

○ ‘13. 01. : 지역균형발전사업 수정심의 채택(경상남도)

○ ‘13. 03. : 사천시 지방재정 투․융자 심사 완료(조건부)

○ ‘14. 05. : 실시설계 및 국립공원계획변경 용역 시행

○ ‘14. 11. : 공원계획 변경 사전협의(환경부, 국립공원)

○ ‘15. 05. : 실시설계 완료

○ ‘15. 06. : 공사착공

□ 향후계획

○ ‘15. 08. : 2015년 2차분 공사발주

○ ‘16. 01. : 2016년분 공사발주

○ ‘17. 08. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

- 당초 : 해변둘레길 1km, 관광센터 A=650㎡, 전망대(2개소) 등

- 변경 : 해변둘레길 720m, 마을쉼터 900㎡, 보행육교 42m, 전망대 1식 등

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

사천바다 케이블카 설치

담당자

도로과

박용국(☎831-2285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한려해상의 중심에 위치한 삼천포항의 수려한 자연경관을 배경으로 관광자원을 개발하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ∼ 2017년

○ 위 치 : 사천시 동서동 일원(대방, 초양, 각산)

○ 규 모 : 삭도 L=2.43km, 상․중․하부정류장 각 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	40,000	2,461	3,448	15,953	18,138
국 비	5,000		1,569	1,431	2,000
시 도 비	10,000	500	221	1,279	8,000
시군구비	25,000	1,961	1,658	13,243	8,138
기 타

□ 추진상황(실시설계 완료 행정절차 이행 및 진도 : 22%)

○ ‘12. 06. : 국립공원계획변경 승인(환경부)

○ ‘13. 10. : 지방재정 중앙 투․융자 심사 승인(조건부)

○ ‘14. 12. : 주요정책 토론회 개최(삭도운행방식 수송능력결정)

○ ‘15. 03. : 실시설계 최종보고 및 시의회 설명

○ ‘15. 06. : 주요정책 토론회 개최(추진방법 : 재정사업으로 추진)

○ ‘15. 06. : 도시계획시설 변경 결정, 풍동 실험 및 실시설계 완료

□ 향후계획

○ ‘15. 하반기 : 환경영향평가 외 각종 인허가 등 행정절차 완료

○ ‘15. 하반기 : 궤도․공원사업시행 허가

○ ‘15. 하반기 : 입찰 및 공사착공

○ ‘15. 하반기 : 사업 준공 및 사업운행 개시

□ 사업변경 내역

구분	총사업비(백만원)				사업규모	사업기간	비고
	합계	국비	도비	시비
당초	40,000	5,000	10,000	25,000	삭도 L=2.53km, 상․중․하부정류장 각1개소	2010∼2016
변경	60,000	5,000	10,000	45,000	삭도 L=2.43km, 상․중․하부정류장 각1개소	2012∼2017

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

문화공원 조성 사업

[사천대방 관광자원 개발사업]

담당자

도로과

박용국(☎831-2285)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국에서 가장아름다운 길 대상에 선정된 삼천포 대교를 찾는 관광객의 관광자원 개발을 통한 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 위 치 : 사천시 대방동 일원

○ 규 모 : A=12,570㎡(잔디 및 광장, 야생화, 조형물, 편익시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,600		222	578	8,800
국 비	3,000				3,000
시 도 비	900				900
시군구비	5,700		222	578	4,900
기 타

□ 추진상황(실시설계 및 보상 중 및 진도 : 10%)

○ ‘13. 12. : 도시계획(공원)결정 및 지형도면 승인고시

○ ‘14. 03. : 조성계획 및 실시설계 용역 실시

○ ‘14. 07. : 지방재정 투·융자 경남도 승인(조건부)

○ ‘14. 12. : 공유재산 관리계획 반영

○ ‘15. 07. : 2016년 지특사업(사천대방 관광자원 개발사업) 확정

○ ‘15. 07. : 보상추진(현재 : 40%)

□ 향후계획

○ ‘15. 12. : 조성계획 수립 및 실시설계 완료

○ ‘16. 06. : 공사 착공

○ ‘18. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	총사업비(백만원)				사업규모	사업기간	비고
	합계	국비	도비	시비
당초	9,600	3,000	900	5,700	A=12,570㎡(복합지원시설, 광장, 주차장 등)	2014∼2016
변경	9,600	4,400	1,320	3,880	A=12,570㎡(잔디 및 광장, 야생화, 조형물, 편익시설 등)	2014∼2018

개별 투융자심사 사 추진현황

사업명

국도3호선 송포교차로 개선사업

담당자

도로과 신성현

(☎831-3377-0000)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도3호선 상습정체구간 및 도로병목지점 개선으로 교통사고 예방

○ 진출․입로 개선으로 지역경제 활성화와 산업물동량 수송원활 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ～ 2017년

○ 위 치 : 사천시 송포동 송포교차로(국도3호선)

○ 규 모 : 교차로정비 L=950m,B=12m, 교량 L=50m,B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,000		3,000	2,000	3,000
국 비	5,000		3,000	2,000
시 도 비
시군구비	3,000				3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ ‘12. 2 ~ ’13. 7 : 기본설계 및 도로병목지점 개선사업 확정

○ ‘13. 12 : 부산지방국토관리청과 대행공사 협약서 체결

○ ‘14. 4 : 실시설계용역 시행중

□ 향후계획

○ ‘15. 6 : 공사착공

○ ‘17. 6 : 공사준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

용강주공A~용두간 도로개설

담당자

도시과

이청용(☎831-3167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획도로개설로 주민생활불편 해소

○지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 위    치  : 사천시 용강동 일원

○ 사업기간  : 2007 ~ 2016(10년간)

○ 사 업 량  : L=860m, B=25m

○ 총 사업비 : 9,500백만원(국비 - , 도비 - , 시군비, 9,500, 기타  )

○ 사업 내용 : 도로개설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,500	700	550	-	8,250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,500	700	550	-	8,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘07. 12 : 실시설계 완료

○ ‘11년 ~ ’13. 09 현재 : 보상협의중(8필지 협의완료)

○ ‘14. 01 : 편입토지 보상

○ ‘14. 03 : 공사착공

○ ‘14. 04 : 관로공 설치 완료

○ ‘14. 05 : 보도 경계석 설치, 보강토 옹벽 설치

□ 향후계획

○ '16. 12 : 공사준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

서포면소재지 종합정비사업

담당자

도시과 (☎831-3161)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌지역의 중심공간으로 육성하여 주민복지 향상에 기여

□ 사업개요

○ 위      치 : 사천시 서포면소재지 일원

○ 사 업 기 간 : 2013년 ~ 2016년(4년간)

○ 사  업  량 : 3개 분야 11개 단위사업

- 기초생활 기반확충 : 도시계획도로개설 외 4건

- 지역경관 개선 : 생태공원조성 외 2건

- 지역역량강화 : 주민 교육훈련 외 2건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원(국비4,872 도비626 시비1,502)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,000	956	1,476	2,417	2,151
국 비	4,872	669	1,033	1,692	1,478
시 도 비	626	86	133	217	190
시군구비	1,502	201	310	508	483
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘12. 10. 24 : 서포면소재지 정비사업 확정 통보

○ ‘13. 04. 09 : 기본계획수립 및 실시설계용역 착수

○ ‘13. 11. 13 : 기본계획고시(사천시)

○ ‘13. 11. 20 : 재래시장 보상협의 실시

○ ‘13. 12. 18 : 도시계획시설(도로) 실시계획 인가

○ ‘14. 02. 28 : 서포면소재지 종합정비공사(2014년분) 착공

○ ‘15. 03. 30 : 서포면소재지 종합정비공사(2014년분) 준공

○ ‘15. 01. 14 : 서포면소재지 종합정비공사(2015년분) 착공

□ 향후계획

○ ‘15. 09 : 재래시장 정비 준공

○ ‘15. 08 : 주민복지센터 준공

○ ‘15. 09 : 위험지구 사거리 개선사업 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

국도3호선(송포교차로)~죽림삼거리간 도로확포장공사

담당자

도시과

박재현(☎831-3166)

□ 사업목적 및 필요성

○국도3호선 준공으로 기존 삼천포항 진입도로 확․포장 필요

○ 삼천포항 지역경제 활성화를 위한 여건조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 송포동 일원

○ 노 선 명 : 남부 대로1-3호선

○ 사업기간 : 2012년 ~ 2017년

○ 사 업 량 : L=1,500m, B=10m→25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원(국비  , 도비 5,000, 시비 10,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	15,500	4,700	2,000	1,000	7,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	500	-	-	4,500
시군구비	10,500	4,200	2,000	1,000	3,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘12. 02. : 실시설계 용역

○ '12. 03. ~ ‘17. 12. : 보상 협의 및 공사 추진

□ 향후계획

○ ’17. 01 : 공사착공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

각산주변 산복도로 개설

담당자

도시과

박현철(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전도모

○ 장기미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 남양동 일원

○ 사업기간 : 2006 ~ 2016(11년간)

○ 사 업 량 : 도로개설 L=2,400m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(시군비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	2,400	200	190	2,210
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	2,400	200	190	2,210
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘13. 05. 14. : 공사(총괄분, 2013년분)착공

○ ‘14. 06. 24. : 공사(2014년분)착공

○ ‘14. 09. 13. : 2013년분 준공

○ ‘15. 05. 21. : 2015년분 착공

○ ‘15. 06. 23. : 2014년분 준공

□ 향후계획

○ ‘16. 05월 : 공사(총괄분, 2015년분) L=720m 구간 사업준공

○ ‘17. 01.~ :잔여구간 보상 추진

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

남양중학교~모충공원간

도시계획도로 개설

담당자

도시과

박현철(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보도 설치로 보행자 통행편의 제공 및 교통사고 방지

○ 학생들의 안전한 통학로 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 사천시 남양동 일원

○ 사업기간 : 2005 ~ 2019(15년간)

○ 사 업 량 : 도로개설 L=1,200m, B=20m

○ 사업내용 : 도로 확포장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원(국비   ,  도비 500 ,  시군비 6,500,  기타    )

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,000	1,580	300	300	4,820
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	6,500	1,080	300	300	4,820
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘13. 01 ~ 06월 : 보상계획 통지 및 보상협의

○ `14. 07 ~      : 지장가옥 철거

○ ‘14. 09. 24. : 총괄분, 2014년분, 2015년분 발주 L=745m

○ ‘14. 10. 31. : 2014년분 공사 착공

○ ‘15. 03. 20. : 2015년분 공사 착공

○ ‘15. 07. 20. : 2014년분 공사 준공

□ 향후계획

○ ‘16. 03. 18. : 총괄분, 2015년분 공사준공

○ ‘16. 01. ~  : 잔여구가 보상 추진

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

지방도 1016호선 우회도로개설

담당자

도시과

강호명(☎831-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화력발전소 등 물동량 수송 차량 시가지 통과로 인한 교통 체증 발생 해소

○ 국가산업단지 조성계획 등에 따른 물동량 수송로 대비

□ 사업개요

○ 위    치  : 사천시 용강․향촌동일원

○ 사업기간  : 2006 ~ 2015년(10년간)

○ 사 업 량  : L=2.12km, B=30m

○ 사업 내용 : 도로개설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총 사업비 : 25,000백만원(도비 1,900, 시군비, 23,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	25,000	15,100	800	200	8,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,900	1,900	-	-	-
시군구비	23,100	13,200	800	200	8,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 1차공사 (용강주공아파트 뒤쪽) ⇒ 2007년 준공

○ 2차공사 (지방도1016호선~운동장 진입도로) ⇒ 2013년 준공

○ 3차공사 (향촌신호등 ~ 지방도1016호선) ⇒ 2015년준공

□ 향후계획

○ 잔여구간 보상(운동장 ~ 용강주공아파트) : 2015년 ~